Progetto esecutivo

Aeroporto di Oristano – Fenosu
Opere di Completamento Fase Zero P.S.A.

“Schema di contratto”

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE CON PREVALENZA DEI PRIMI
CAPO I -  NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE E DESIGNAZIONE  DELLE OPERE DA REALIZZARE E DELLE FORNITURE
Art. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 2	CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E  CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DELLE FORNITURE  DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE
Art. 3	AMMONTARE DELL’APPALTO – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 4	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO
Art. 5	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
Art. 6	FORNITURE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE
CAPO II -  DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO
Art. 8	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 9	OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.
Art. 10	DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Art. 11	FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Art. 12	RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA – DIRETTORE DI CANTIERE
Art. 13	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
CAPO III -  TERMINE PER L’ESECUZIONE
Art. 14	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
Art. 15	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 16	SOSPENSIONI E PROROGHE
Art. 17	PENALI IN CASO DI RITARDO
Art. 18	PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
Art. 19	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO           DEI TERMINI
Art. 21	DANNI DA FORZA MAGGIORE
CAPO IV -  DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22	ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA
Art. 23	PAGAMENTI IN ACCONTO
Art. 24	PAGAMENTI A SALDO
Art. 25	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Art. 26	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Art. 27	DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI
Art. 28	INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Art. 29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 30	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
CAPO V -  CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31	GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 32	ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
CAPO VI -  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33	VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Art. 34	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Art. 35	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
CAPO VII -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36	NORME DI SICUREZZA GENERALI
Art. 37	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Art. 38	PIANI DI SICUREZZA
Art. 39	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 40	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
CAPO VIII -  DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 41	LAVORI A CORPO
Art. 42	LAVORI A MISURA
Art. 43	LAVORI IN ECONOMIA
Art. 44	VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO E ONERI DI SICUREZZA
Art. 45	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE
Art. 46	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
CAPO IX -  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47	SUBAPPALTO
Art. 48	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Art. 49	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE
CAPO X -  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’IMPRESA
Art. 50	INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO E CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Art. 51	DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA
Art. 52	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  (ONERI DI CAPITOLATO)
Art. 53	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
CAPO XI -  MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 54	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
Art. 55	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
CAPO XII -  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56	COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO
Art. 57	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE
Art. 58	CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE
Art. 59	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Art. 60	CUSTODIA DEL CANTIERE
Art. 61	CARTELLO DI CANTIERE
Art. 62	SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE CON PREVALENZA DEI PRIMI

 (articolo 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

		Euro	
a)	Importo lavori	2.507.357,05	
b)	A dedurre oneri della sicurezza 	65.247,99	
c)	Importo lavori a base d’asta	2.442.109,06	
d)	Forniture di apparecchiature ed attrezzature a base d’asta 	740.000,00	
1)	Importo lavori e forniture da assoggettare a ribasso	3.182.109,06	
e)	Oneri della sicurezza 	65.247,99	
3)	Totale appalto	3.247.357,05	
4)	Somme a disposizione dell’Amministrazione	530.481,80	
			
5)	Importo complessivo progetto	3.777.838,85	

Il Responsabile del Procedimento		Il Progettista	
Geom. Vittorio Mannoni		Ing. Giampaolo Cilloccu	
		Ing. Emilio Balletto	
		Ing. Giovanni Nugnes	

			

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE di ORISTANO
Repertorio n. ……..
del ….…………….

CONTRATTO D’APPALTO

misto di lavori e forniture con prevalenza dei primi per l’esecuzione dei lavori relativi a ”Aeroporto di Oristano – Fenosu – Opere di completamento fase zero P.S.A." e la fornitura di apparecchiature ed attrezzature di cui al “Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature”. 

I sottoscritti:
-	Sig. _____________________ , nato a______________ il __________, domiciliato per la carica in ________________ (_____), via _____________________ n. ____, , il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ________________________;
-	Sig. _____________________ nato/a a _____________ (___) il ________________, residente in ________________ (_____), via ______________ n. ____, in qualità di ________________________ dell’impresa “ _____________________________ ”, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di _________________ della società: “__________________________________”, con sede in ______________________ in _____________________ (____) via _________________________ n. ___ , codice fiscale ________________________ e partita IVA ______________________, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri spettatigli ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.
PREMESSO
•	che la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto all’art.11 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3, un contributo straordinario di €  5.165.000,00 nel 2003 per le opere di ampliamento e riqualificazione degli impianti e delle infrastrutture dell’aeroporto di Oristano - Fenosu;
•	che è stata stipulata, tra l’Assessore dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ed il legale rappresentante della SO.GE.A.OR., S.p.A. (Società di Gestione Aeroporti Oristanesi S.p.A.),  apposita convenzione di rep. n. 27, del 16 luglio 2003, per disciplinare la realizzazione del programma e l’erogazione del contributo;
•	che, la suddetta convenzione, all’art. 4 (Erogazione del contributo) ha rimandato l’erogazione del contributo alla stipula di apposita convenzione attuativa disposta dal Direttore del Servizio Tecnico dell’Assessorato dei Trasporti ed il legale rappresentante della Società di Gestione SO.GE.A.OR. S.p.A. per disciplinare la realizzazione del programma e l’erogazione del finanziamento;
•	che tra l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e la SO.GE.A.OR. S.p.A. in data 24.12.2004 è stata stipulata la convenzione attuativa rep. n. 59 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dell’aeroporto di Oristano - Fenosu per il “Completamento ed il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali”, nell’ambito dei quali è ricompresso (art. 2 - Oggetto della concessione) l’intervento relativo alle “Opere e forniture di completamento” per l’importo complessivo lavori e forniture di € 3.777.838,85;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano costituire parte integrante del presente contratto:

CAPO I - 
NATURA, OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE E DESIGNAZIONE 
DELLE OPERE DA REALIZZARE E DELLE FORNITURE
Art. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che dichiara di assumerla, la realizzazione delle opere denominate “Aeroporto di Oristano – Fenosu – Opere di completamento fase zero P.S.A.”, composte da lavori, come da “Capitolato Speciale d’Appalto”, e da fornitura delle apparecchiature ed attrezzature di cui al “Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature”. 
L'ammontare, a corpo, dei lavori a base d’asta è di € 2.442.109,06 (diconsi euro duemilioniquattrocentoquarantaduemilacentonove/06), soggetti a ribasso, che diminuiti del ribasso offerto del _______%, pari ad € ______________, restano determinati in € ______________. Restano  invariati, perché non soggetti a ribasso, l’importo per oneri riguardanti la sicurezza di € 65.247,99 (diconsi euro sessantacinquemiladuecentoquarantasette/99).
L'ammontare, a corpo, delle forniture delle apparecchiature ed attrezzature di cui al “Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature” a base d’asta è di € 740.000,00 (diconsi euro settecentoquarantamila/00), soggetti al medesimo ribasso dei lavori di cui sopra, che diminuiti del ribasso offerto del _______%, pari ad € ______________, restano determinati in  € _____________.
L’importo totale netto contrattuale dei lavori e delle forniture di cui sopra è, pertanto, di € ______________, pari alla somma dell’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del _______%, pari a € ______________, dell’importo delle forniture, al netto del ribasso d’asta del _______%, pari a € ______________, e dell’importo per gli oneri riguardanti la sicurezza pari a € 65.247,99. In tale importo è compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore.
Il contratto d'appalto di cui al presente Schema di Contratto viene stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 326 della legge n° 2248 del 20.03.1865 - allegato F.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile e, trattandosi di contratto a corpo, si richiama il 2° comma dell'art. 326 della legge sulle opere pubbliche n. 2248 del 1865. Il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla quantità delle opere stesse.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari dell’Elenco dei prezzi unitari del Progetto esecutivo della Stazione appaltante.
Pertanto i prezzi unitari soggetti al ribasso d’asta non hanno valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo a corpo dei lavori e sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 25 comma 1 lettera a), b), b-bis) e c) della legge 109/94 nel testo vigente.

I lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature di cui al “Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature”.
Il presente schema di Contratto stabilisce le norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e della fornitura di apparecchiature ed attrezzature di cui al “Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature”.
La Stazione appaltante è la R.A.S. (Regione Autonoma della Sardegna) - Assessorato dei Trasporti, alla quale è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, e l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori e le forniture.
L’Ente Appaltante consegna all’impresa il Progetto Esecutivo delle opere, comprese relazioni, indagini geognostiche, disegni, calcoli di dettaglio, elenco prezzi, computo metrico estimativo, specifiche tecniche, capitolato speciale d’appalto, capitolato speciale prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature, meglio specificati nell’Elenco allegati al Progetto Esecutivo, allo scopo di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e delle forniture delle apparecchiature ed attrezzature da effettuare.
L’Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati del Progetto Esecutivo non allegati al contratto alcuna pretesa né nella fase di esecuzione, né nella fornitura.
Le presenti Condizioni Amministrative valgono  anche per l'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'impresa, e che l'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato negli articoli successivi.
L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del Progetto Esecutivo ed in particolare quelle contenute nel presente  Schema di Contratto, nonché  nel Capitolato Speciale d’appalto e nel Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature. 
Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga e si sottomette, nella più ampia forma legale, ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denominati ”Aeroporto di Oristano-Fenosu – Opere di completamento Fase Zero P.S.A. ”, in conformità del progetto esecutivo, nonché a provvedere alle forniture delle apparecchiature ed attrezzature di cui al Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature. 
Sono elencati nell’art. 10 del presente contratto gli elaborati descrittivi e grafici allegati al contratto, facenti parte del progetto esecutivo. I lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, stabilite, oltre che nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature, per farne parte integrante e sostanziale, firmati su ciascun foglio dai contraenti, allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min.LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e che sarà applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature. Si richiamano, inoltre, il Regolamento di attuazione della legge quadro D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e le norme della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2	   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E                                        CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DELLE FORNITURE                             DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal “Capitolato Speciale d’Appalto” e dal “Capitolato speciale prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature”, integranti il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 3	AMMONTARE DELL’APPALTO – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del Regolamento 554/1999.

L’importo contrattuale dei lavori è definito così come segue:

A1)	Lavori a corpo	€	2.507.357,05
	A dedurre:
A2)	oneri sicurezza delle singole lavorazioni 	€	56.747,99
A3)	oneri speciali sicurezza (D. Lgs. 626/94)	€	8.500,00
A4)	Sommano oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)	€	65.247,99	€	65.247,99
A3)	Importo lavori a base d’asta	€	2.442.109,06
A4)	Importo forniture di apparecchiature ed attrezzature a base d’asta	€	740.000,00
	Importo lavori e forniture da assoggettare a ribasso d’asta	€	3.182.109,06
A5)	Oneri sicurezza (da non assoggettare a ribasso d’asta)	€	65.247,99
       Importo totale appalto	€	3.247.357,05
			
L’importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
È espressamente inteso che gli importi relativi al compenso a corpo per la sicurezza, fissato in euro 65.247,99, così come non può essere assoggettata a ribasso, non potrà neppure essere aumentata dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fissa ed invariabile.
Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel modo indicato dal Regolamento n° 554 approvato con D.P.R. del 21.12.1999, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della legge LL.PP. 20.3.1895 n° 2248.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
Nel caso in cui la D.L. disponesse in corso d’opera interventi per risolvere aspetti di dettaglio, che comportino eventuali addizioni o sottrazioni rispetto al progetto a base d’appalto, si procederà alla loro contabilizzazione applicando i prezzi unitari contrattuali.
Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

Art. 4	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, ALTRE CATEGORIE DI LAVORO 
Ai sensi ed ai soli fini dell'art. 34 (subappalto) della legge n° 109/94 così come modificata dalla legge 216/95 e dalla legge 415/98, degli articoli n°. 72, 73, 74 e 141 del Regolamento n° 554 vengono qui appresso indicate:

-	categoria prevalente:
OG3   Strade, autostrade, ponti, etc. ed opere complementari	Euro  1.195.251,43	47,83%

-	categorie scorporabili:
OG1    Edifici civili ed industriali                                      		Euro     632.420,25	 25,31%
OG11  Impianti tecnologici		Euro     671.185,37	 26,86%
	                                                                
Totale			Euro   2.498.857,05  100,00%

L’importo dei lavori sopraindicato è comprensivo degli oneri per la sicurezza inerenti alle singole lavorazioni, ammontanti a complessivi € 56.747,99, non includendo quelli speciali di cui al D.lgs. 626/1994, valutati pari a € 8.500,00.

Art. 5	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
L’indicazione dei gruppi di lavorazioni omogenee sotto specificati ha valore ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni di cui agli articoli 11 e 12 del capitolato generale d’appalto o delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 25 della legge n. 109 del 1994 nel testo vigente:

GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI	

 	Categoria	Importo categoria inclusi oneri sicurezza delle singole voci	Importo oneri sicurezza nelle singole voci	Importo della categoria depurato degli oneri sicurezza	Incidenza percentuale della singola categoria	
1	Canaletta di smaltimento delle acque meteoriche piazzale aeromobile	€ 71.309,56	€ 1.918,46	€ 69.391,10	2,85%	
2	Canaletta di deflusso delle acque meteoriche al canale Spinarda	€ 51.281,56	€ 1.188,35	€ 50.093,21	2,05%	
3	Depuratore	€ 74.965,46	€ 1.539,55	€ 73.425,91	3,00%	
4	Disoleatore	€ 25.981,37	€ 651,68	€ 25.329,69	1,04%	
5	Edificio tecnico in moduli prefabbricati	€ 103.744,14	€ 3.471,69	€ 100.272,45	4,15%	
6	Edificio tecnico apparati e avvistamento volo	€ 191.453,29	€ 4.561,19	€ 186.892,10	7,66%	
7	Tettoia ricovero mezzi di rampa	€ 45.896,41	€ 943,59	€ 44.952,82	1,84%	
8	Tettoia ricovero automezzi VV FF	€ 35.839,93	€ 1.029,43	€ 34.810,50	1,43%	
9	Serbatoio pensile	€ 13.512,55	€ 393,17	€ 13.119,38	0,54%	
10	Parcheggio autovetture e viabilità	€ 151.723,64	€ 3.381,67	€ 148.341,97	6,07%	
11	Piazzale aeromobili	€ 523.055,16	€ 10.718,77	€ 512.336,39	20,93%	
12	Raccordo tra piazzale aeromobili e pista	€ 77.267,76	€ 1.628,99	€ 75.638,77	3,09%	
13	Allungamento pista	€ 50.955,79	€ 1.076,00	€ 49.879,79	2,04%	
14	Demolizioni di pavimentazioni e parti di strutture	€ 110.896,00	€ 2.233,92	€ 108.662,08	4,44%	
15	Rete idrica ed antincendio	€ 108.438,87	€ 2.318,83	€ 106.120,04	4,34%	
16	Impianto di condizionamento e antincendio edificio tecnico	€ 44.400,00	€ 888,00	€ 43.512,00	1,78%	
17	Impianto elettrico	€ 234.000,00	€ 4.680,00	€ 229.320,00	9,36%	
18	Impianto di illuminazione piazzale aeromobili e parcheggio	€ 182.600,00	€ 5.063,00	€ 177.537,00	7,31%	
19	Impianto fognario	€ 101.746,50	€ 2.282,16	€ 99.464,34	4,07%	
20	Riserva idrica e fabbricato di servizio	€ 101.527,10	€ 2.637,27	€ 98.889,83	4,06%	
21	Recinzione	€ 39.500,00	€ 790,00	€ 38.710,00	1,58%	
22	Bretelle VV FF	€ 56.856,51	€ 1.187,49	€ 55.669,02	2,28%	
23	Piazzale di servizio	€ 101.905,45	€ 2.164,78	€ 99.740,67	4,08%	
 	TOTALE	€ 2.498.857,05	€ 56.747,99	€ 2.442.109,06	100,00%	

L’importo dei lavori sopraindicato è comprensivo degli oneri per la sicurezza inerenti alle singole lavorazioni, ammontanti a complessivi € 56.747,99, non includendo quelli speciali di cui al D.lgs. 626/1994, valutati pari a € 8.500,00.

Art. 6	FORNITURE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE

Formano oggetto del presente appalto, oltre ai lavori suindicati, anche le forniture descritte nel “Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture delle apparecchiature ed attrezzature” (Elaborato N), di seguito elencate:

GRUPPI DI FORNITURE – CATEGORIE CONTABILI	

 	Fornitura	importo 	Incidenza percentuale della singola fornitura	
A	Impianto di stoccaggio ed erogatori carburante	€ 220.000,00	29,73%	
B	Servizio handling	€ 198.000,00	26,76%	
C	Attrezzature controllo bagagli e passeggeri	€ 173.000,00	23,38%	
D	Arredi	€ 59.500,00	8,04%	
E	Attrezzature antincendio	€ 61.500,00	8,31%	
F	Attrezzatura informatica	€ 28.000,00	3,78%	
 	TOTALE	€ 740.000,00	100,00%	

CAPO II - 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 
Art. 7	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, le vie d’accesso, la natura geologica del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatte discariche, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti dalla stessa.
É altresì sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire su tutti gli oneri a suo carico (relativi al presente contratto) nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo, per i quali è previsto un apposito compenso a corpo.
In particolare l’Impresa con l’assunzione dell’Appalto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni  di cui al presente Contratto. 
Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire o in occupazione temporanea, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

Art. 8	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. 	In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. 	In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. 	L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9	OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.
In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Contratto, l'Impresa é soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nella legge sui lavori pubblici 20.3.1865 n° 2248 all.F, delle norme dalla legge Quadro in materia di lavori pubblici n° 109 del 11.02.1994 e s.m.i., del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, del Capitolato Generale di Appalto D.M. n° 145 del 19.04.2000.
L'Impresa si impegna inoltre:
a)	all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n° 19;
b)	all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 235 e successive modificazioni ed integrazioni, legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974, n° 247, legge 28.1.1977 n° 10, legge 3.1.1978 n° 1, legge n° 350 del 29.3.1980;
c)	all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità  di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.
Non si farà  luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni.
d)	ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori oggetto del presente appalto (esempio: Casse Edili, etc.), come più dettagliatamente regolamentato nel successivo articolo 54. 
e)	all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;
f)	all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti telefonici;
g)	all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate da competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali. 

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguar-dino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.
Art. 10	   DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
1. 	Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

1.	il Capitolato Generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
2.	il Capitolato Speciale d’Appalto;
3.	il Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature;
4.	gli elaborati descrittivi e grafici progettuali;
5.	l’elenco dei prezzi unitari;
6.	i piani di sicurezza previsti dall’art. 31 della L. 109/94;
7.	il cronoprogramma.

ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI
Elaborato	Titolo	
A	 Relazione generale descrittiva 	
A1	Relazione geologica e geotecnica	
A2	Relazione di calcolo pavimentazione piazzale aeromobili	
A3	Relazione di calcolo pavimentazioni flessibili	
A4	Relazione di calcolo strutture	
A5	Relazione di calcolo impianto climatizzazione	
A6	Relazione di calcolo impianto idrico	
A7	Relazione di calcolo impianto elettrico	
A8	Relazione idrologica ed idraulica	
A9	Relazione impianto antincendio	
A10 	Relazione calcoli illuminotecnica	

ELENCO ELABORATI GRAFICI
Tavola	Titolo	Scala	
1	Corografia	1:10000	
2	Inquadramento urbanistico	1:5000	
3	Planimetria generale dell'area aeroportuale	1:2000	
4	Raccordo pista piazzale: planimetria d'unione	1:500	
5	Piazzale aeromobili: profilo e sezioni dalla n°1 alla n°9	varie	
6	Piazzale aeromobili: profilo e sezioni dalla n°10 alla n°19	varie	
7	Piazzale di servizio 1: profili e sezioni	varie	
8	Piazzale di servizio 2: profili e sezioni	varie	
9	Piazzale di servizio 3: profili e sezioni	varie	
10	Raccordo pista piazzale: profili e sezioni	varie	
11	Allungamento pista	varie	
12	Allungamento pista: profili e sezioni	varie	
13	Bretelle VV.FF.: planimetria di progetto	2000	
14	Viabilità di servizio 1: profili e sezioni	varie	
15	Viabilità di servizio 2: profili e sezioni	varie	
16	Viabilità di servizio 3: profili e sezioni	varie	
17	Demolizione recinzione	varie	
18	Recinzione: particolari costruttivi	1:25	
19	Planimetria di progetto viabilità e parcheggi	1:200	
20	Area parcheggi 1: profili e sezioni	varie	
21	Area parcheggi 2: profili e sezioni	varie	
22	Strada di accesso: profili e sezioni	varie	
23	Piazzale aeromobili: canali di smaltimento acque meteoriche	1:500	
24	Piazzale aeromobili: canali di smaltimento acque meteoriche particolari	varie	
25	Parcheggi: rete smaltimento acque meteoriche	varie	
25 bis	Planimetria reti acqua generale	1:200	
26	Tettoie ricovero mezzi di rampa e automezzi VV.FF.:piante e prospetti	1:100	
27	Tettoie ricovero mezzi di rampa :pianta di tracciamento	1:200	
28	Tettoie ricovero automezzi VV.FF. :pianta di tracciamento	1:200	
29	Tettoie ricovero mezzi di rampa :pianta fondazioni e particolari costruttivi	varie	
30	Tettoie ricovero mezzi di rampa :strutture metalliche copertura e pareti laterali	varie	
31	Tettoie ricovero mezzi di rampa :strutture metalliche copertura e pareti frontali	varie	
32	Tettoie ricovero automezzi VV.FF. :pianta fondazioni e particolari costruttivi	varie	
33	Tettoie ricovero automezzi VV.FF. :strutture metalliche copertura e pareti laterali	varie	
34	Tettoie ricovero automezzi VV.FF. :strutture metalliche copertura e pareti frontali	varie	
35	Tettoie ricovero mezzi di rampa e automezzi VV.FF.: impianto elettrico	1:100	
36	Edificio tecnico: piante quotate ed arredate	1:100	
36 bis	Edificio tecnico: adattabilità (legge 13/1989)	1:100	
37	Edificio tecnico: prospetti e sezioni	1:100	
38	Edificio tecnico: particolari scala	1:20	
39	Edificio tecnico: pianta di tracciamento	1:200	
40	Edificio tecnico: pianta fondazioni e particolari costruttivi	varie	
41	Edificio tecnico: telaio A-B particolari costruttivi	varie	
42	Edificio tecnico: telaio C-D particolari costruttivi	varie	
43	Edificio tecnico: telaio E-F particolari costruttivi	varie	
44	Edificio tecnico: telaio G-H particolari costruttivi	varie	
45	Edificio tecnico: telaio I-L particolari costruttivi	varie	
46	Edificio tecnico: impianto elettrico	1:100	
47	Edificio tecnico: impianto antincendio e rilevamento fumi	1:100	
48	Edificio tecnico: impianto di climatizzazione e ventilazione	1:100	
49	Edificio tecnico: schema impianto idrico	1:500	
50	Edificio tecnico: impianto idrico	1:100	
51	Serbatoio pensile VV.FF.: piante e prospetti	varie	
52	Serbatoio pensile VV.FF.: particolari	1:5	
53	Serbatoio pensile VV.FF.: pianta di tracciamento	1:200	
54	Disoleatore: pianta, sezioni, particolari	1:50	
55	Disoleatore: pianta di tracciamento	1:200	
56	Impianto di depurazione: piante e sezioni	1:50	
57	Depuratore: pianta di tracciamento	1:200	
58	Riserve idriche e stazione di pompaggio: piante, sezioni, prospetti	1:100	
59	Riserve idriche e stazione di pompaggio: pianta di tracciamento	1:200	
60	Riserve idriche e stazione di pompaggio: costruttivo cls armato carpenterie-armature	1:50	
61	Riserve idriche e stazione di pompaggio:particoalre pozzetti sfioro	1:25	
62	Riserve idriche e stazione di pompaggio: locale pompe e servizi accessori	1:100	
63	Planimetria generale rete idrica	1:400	
64	Planimetria generale copertura rete antincendio	1:400	
65	Schemi impianto idrico	1.200	
66	Planimetria generale rete elettrica	1.200	
67	Planimetria generale rete impianto messa a terra	1.200	
68	Planimetria generale area per calcoli illuminotecnici	1.200	
69	Torre faro 20.00m: particolari	varie	
70	Torre faro 17.50m: particolari	varie	
71	Torre faro 15.50m: particolari	varie	
72	Palo ottagonale: particolari	varie	
73	Schema blocchi distribuzione energia	1:100	
74	Quadro fornitura energia	1:100	
75	Quadro generale (Q.G.B.T.)	1:100	
76	Quadro generale tettoie 1 e 2 (Q.T. 1 e Q.T. 2)	1:100	
77	Quadro generale edificio tecnico (Q.Edif.)	1:100	
78	Edificio tecnico: quadro piano terra (Q.T.)-quadro piano primo (Q.P1)-quadro torretta (Q.T.)	1:100	
79	Quadro generale illuminazione esterna (Q.Illum.)	1:100	
80	Quadro torre faro 1(Q.TF1)-torre faro 2(Q.TF2)-torre faro 3(Q.TF3)-torre faro 4(Q.TF4)	1:100	
81	Quadro UPS-quadro gruppo elettrogeno (Q.Ge.)	1:100	
82	Quadro centrale pompaggio acque (Q.C.P.A.)	1:100	
83	Verifica rispetto superfici di transizione	varie	
	
L’Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza di tali elaborati alcuna pretesa nella fase di esecuzione. 

2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
•	la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
•	la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata e modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;
•	l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
•	il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21.12.99, n. 554;

Per ciò che concerne le modalità esecutive è data priorità alle prescrizioni contenute nei seguenti elaborati, nell’ordine in cui si trovano:
1)	Elenco prezzi
2)	Elaborati grafici
3)	Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature.
Art. 11	   FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dall’art. 10, comma 1-ter, della Legge n. 109/1994.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale D.P.R. n° 554 del 21.12.1999.
Art. 12	    RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - DOMICILIO DELL'IMPRESA – DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, che comunque deve essere un ingegnere abilitato e con competenza specifica documentata in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 13	  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. 	Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. 	Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

CAPO III - 
TERMINE PER L’ESECUZIONE
Art. 14	  CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1.	E’ altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell’articolo 130 del regolamento n. 554 del 28/04/2000, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.
2.	Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l’appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3.	L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
4.	Ugualmente, prima dell’inizio di lavorazioni subappaltate, le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
5.	Durante il prosieguo dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta al comma 2 dell’art. 55 del presente Contratto.
Art. 15	  TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. 	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (duecento)  naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. 	Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle interruzioni di attività del cantiere in occasione di Ferragosto o Natale, nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibile nella zona.
3.	L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 16	  SOSPENSIONI E PROROGHE
1.	Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 109/1994.
2.	Si applicano l’articolo 133 del Regolamento Generale e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto.
3.	L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4.	A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5.	I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6.	In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
7.	Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
Art. 17	  PENALI IN CASO DI RITARDO
1.	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere e delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o delle forniture o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale nella misura di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
2.	In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 20, in materia di risoluzione del contratto. 
3.	L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 18	  PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
1.	Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori: 
•	un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione predisposto dall’Ente appaltante con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
•	Un cronoprogramma che conterrà l’avanzamento finanziario parziale e progressivo delle varie lavorazioni.
2.	Il programma dei lavori dovrà contenere:
a)	La suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
b)	La data di apertura del cantiere, con l’indicazione degli impianti e mezzi d’opera che verranno impiegati;
c)	L’ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali;
d)	La dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d’opera previsti da impiegare, ed in particolare degli impianti per la produzione dei calcestruzzi;
e)	La provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi, con i risultati di prove preliminari eseguiti con detti materiali;
f)	Le modalità del trasporto del calcestruzzo dall’impianto di confezione alle varie zone d’impiego;
g)	L’ordine e le modalità di esecuzione delle forniture di cui al Capitolato Speciale Prestazionale delle forniture di apparecchiature ed attrezzature. 
3. 	Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a)	per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b)	per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c)	per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d)	per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e)	qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Art. 19	  INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a)	il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b)	l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c)	l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa amministrazione;
d)	il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e)	il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Contratto d’appalto;
f)	le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g)	le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 20	     RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO           DEI TERMINI
1.	L’eventuale ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a novanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2238, allegato "F" e dell’articolo 119 del Regolamento Generale.
2.	La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.
3.	Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4.	Anche in questo caso sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 21	    DANNI DA FORZA MAGGIORE
I danni riconosciuti esclusivamente da cause di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale dei LL.PP.
Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
L'Impresa, oltre alle modalità  esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, é obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.
I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà  tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

CAPO IV - 
DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22	 ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 23	  PAGAMENTI IN ACCONTO
1. 	I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti (compresi gli eventuali lavori in economia), aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiungano al netto della ritenuta di cui al comma 2 un importo non inferiore ad Euro 500'000,00 (Euro cinquecentomila/00).
2. 	Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il ……………………" con l’indicazione della data.
	Dall'importo complessivo saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:
a)	la ritenuta dello 0.50%,di cui all’articolo 7 comma 2 del Capitolato Generale; tale ritenuta sarà liquidata, nulla ostando, in sede di conto finale;
b)	l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.
3. 	La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato e dell’eventuale certificato per lo svincolo delle garanzie, entro i successivi 30 giorni dalla consegna all’Ammini-strazione delle relative fatture, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
4. 	Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. Analogamente si procederà nel caso di emissione dell’ultimo S.A.L.
5. 	Non si provvederà all’emissione del S.A.L., pur avendo raggiunto l’importo di cui al precedente comma 1, qualora l’Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori i disegni esecutivi di tutte le opere realizzate, quotate con chiarezza e precisione, predisposti a totale cura e spese dell’impresa in conformità delle prescrizioni dell’art. 52 del presente Contratto d’appalto. Ciò in quanto la mancata consegna di quanto sopra, che costituisce inadempienza contrattuale, non consentirebbe la predisposizione degli atti conseguenti, di competenza della direzione dei lavori, impedendo il puntuale riscontro dimensionale e quantitativo delle diverse categorie di lavoro realizzate rendendo quindi impossibile la compilazione dei documenti contabili prescritti a norma di legge.
6. 	Qualora l’Appaltatore non provveda a consegnare alla direzione dei lavori quanto indicato nell’art. 54 del presente Contratto e cioè copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa, l’Amministrazione provvederà alla detrazione di cui al comma 3 dell’articolo 54 del presente Schema di Contratto.
7. 	Non si provvederà altresì all’emissione del certificato di pagamento se l’appaltatore non avrà trasmesso alla Stazione appaltante quanto richiesto nell’articolo 49 del presente Contratto (copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ai subappaltatori, etc.) relativi agli S.A.L. precedenti, salvo motivata giustificazione scritta. Nel caso in cui l’Amministrazione non ritenesse motivata la precedente giustificazione potrà essere applicata, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, una ritenuta del 20% sui certificati di pagamento a titolo di garanzia per l'adempimento degli obblighi nei riguardi dei subappaltatori.
Art. 24	  PAGAMENTI A SALDO
1.	Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dall’ultima fra le seguenti date:
•	data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
•	termine perentorio, di cui al comma 2 dell’art. 172 del Regolamento n° 554/1999, eventualmen-te assegnato nel certificato di ultimazione per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
•	data di consegna della documentazione di cui all’art. 23 comma 5 del presente Contratto. 
La contabilizzazione di eventuali lavorazioni di piccola entità, di cui al comma 2 dell’art. 172 del Regolamento, sarà effettuata in sede di conto finale. 
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. 	Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Ciò ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di cui al d.R.P. 21 Dicembre 1999, n. 554.
3. 	La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994; tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. 	La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
5. 	Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 25	  RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. 	Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.
2. 	Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la consegna all’Amministrazione delle fatture relative ai certificati emessi e dell’eventuale polizza fideiussoria per lo svincolo delle ritenute di garanzia, e l’effettivo pagamento degli stessi certificati a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.
3. 	Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. 	E’ comunque facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
Art. 26	  RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. 	Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. 	Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27	DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI
L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, si intende, senza restrizione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:
a)	per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
b)	per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
c)	per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
d)	per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, degli eventuali rallentamenti nell’esecuzione degli scavi  da eseguire alla presenza della Soprintendenza Archeologica e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.
Art. 28	INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
1.	Ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, e della Legge n. 331/2004, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. 	Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i cinque anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 
Art. 29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Impresa Appaltatrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'Impresa, qualora abbia interessi da far valere notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dalla notifica.
L’Impresa appaltatrice non potrà, di conseguenza, adire l’autorità giudiziaria prima che l’Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. 
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all’art. 31 bis, primo comma, della legge n° 109/94 così come modificata dalla legge n° 216 del 02.06.1995 e dalla legge n° 415 del 18.11.1998 (accordo bonario).
Anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 31 bis (accordo bonario) della Legge 109/94 e succ. modif. nel testo vigente, è esclusa la competenza arbitrale.

La definizione delle controversie è regolamentata dagli articoli 33 e 34 del capitolato generale d’appalto.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 30	  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. 	E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. 	E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

CAPO V - 
CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31	  GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. 	Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 11.02.1994 n. 109, l’impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, mediante polizza n. ______________ in data ________________ rilasciata da _____________________ per l’importo di € ______________________ pari al __% dell’importo netto contrattuale.
2. 	La Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
3. 	La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
4. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Art. 32	  ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA
1.	Secondo quanto stabilito all’art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, l’impresa è obbligata, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109/1994 a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in € 50.000,00 (euro cinquantamile/00).
	L’IMPRESA assume inoltre la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'IMPRESA ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.), sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero ___________________ in data ________________ rilasciata da “___________________” agenzia di _______________ per un massimale di € ___________
3.	La suddetta polizza assicurativa - contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - prevede:
a)	la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori delle opere, come indicato al punto 1. del presente articolo;
b)	la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’IMPRESA, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
c)	la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’IMPRESA è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4.	La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad Euro 1.500.000,00 e deve:
a)	prevedere la copertura dei danni che l’IMPRESA debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguen-za del comportamento colposo commesso dall’ IMPRESA o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’ IMPRESA, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’IMPRESA o della Stazione appaltante;
b)	prevedere la copertura dei danni biologici;
c)	prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5.	Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’IMPRESA coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’IMPRESA sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6.	Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

CAPO VI - 
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33	VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
1.	La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale e dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. 
2.	Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3.	Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà  all'Impresa qualora esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto della Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Amministrazione appaltante.
4. 	Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle lavorazioni omogenee, come indicate nell’articolo 5 del presente Contratto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5.	Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 34	  VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1.	Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. 	In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

Art. 35	  PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3 del presente Contratto. Qualora nell’elenco prezzi, tra i prezzi offerti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui agli articoli 134 e 136 del regolamento di cui al D.P.R. 21.12.1999, n. 554

CAPO VII - 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36	 NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 37	  SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. 	L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 2 e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante altresì le notizie di cui ai commi 4 e 5 della stessa norma, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 38	  PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Art. 39	  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. 	L'appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivo al contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. 	Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente Schema di Contratto, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.
Art. 40	  OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. 	L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. 	I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. 	L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. 	Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

CAPO VIII - 
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 41	   LAVORI A CORPO
1.	La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2.	Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3.	L’importo dei lavori da contabilizzare a corpo risulterà, ai fini dei pagamenti delle rate di acconto, dalla sommatoria dei prodotti delle incidenze delle singole di categorie di lavoro risultanti dalle tabelle per la percentuale di avanzamento delle stesse categorie di lavoro eseguite riportate nel progetto esecutivo.
4.	La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art. 42	  LAVORI A MISURA
1. 	La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. 	Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 
4. 	La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali.
Art. 43	    LAVORI IN ECONOMIA
Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Impresa é obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.
Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.
Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, ai sensi dell’articolo 153 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, l'importo verrà compensato con i prezzi elementari al lordo del ribasso d'asta riportati nel Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche per la Sardegna.
La valutazione di cui sopra dei lavori in economia si intende già comprensiva degli oneri per la sicurezza, in quanto tutte le prestazioni in economia sono compensate al lordo del ribasso d’asta.
Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.
Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.
Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 44	  VALUTAZIONE DEI COMPENSI A CORPO E ONERI DI SICUREZZA
1.	Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza, fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’asta, verrà liquidato in quote proporzionali all’avanzamento dei lavori, come più dettagliatamente specificato nell’articolo 3 del presente Contratto.
2. 	L’importo dei lavori ed oneri compensati a corpo, al netto del ribasso contrattuale, restano fissi ed invariabili: non spetteranno quindi all'impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale LL.PP., ed anche quando l'Ammini-strazione, nei limiti dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero in dispensabile una proroga al termine contrattuale.
Art. 45	   LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE
Per lavorazioni o somministrazioni su fattura si procederà secondo quanto disposto nell’articolo 161 del Regolamento Generale n° 554/1999.
Su tali lavori non sono applicate le percentuali per oneri di sicurezza, spese generali ed utili di impresa, né alcun interesse per somme anticipate.
L’importo relativo verrà inserito direttamente nel S.A.L., senza iscrizione nel registro di contabilità, con l’emissione di specifico certificato di pagamento, sul quale non verranno applicate le trattenute di legge. Tali lavori potranno essere effettuati sempre che trovino capienza entro le somme previste per eventuali lavori in economia o su eventuali economie realizzate nell’ambito dei lavori appaltati.
Art. 46	   VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1.	I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 23 del presente Contratto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
2.	In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3.	I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO IX - 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47	  SUBAPPALTO

1. 	Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del contratto, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b)	fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c)	qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione siano compresi, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, secondo quanto previsto all’ articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di tali opere che devono essere eseguite direttamente dai soggetti affidatari. I soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce l’elenco delle opere di cui al presente comma;
d)	i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
2. 	L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a)	che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b)	che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c)	che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documenta-zione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’impor-to dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d)	che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. 	Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 
4. 	L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a)	l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b)	nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c)	le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 
d)	le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. L’Appaltatore ed i subappaltatori per suo tramite devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale e in ogni caso prima dell’emissione di ogni stato di avanzamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa; in caso contrario l’Amministrazione applicherà quanto disposto al comma 3 dell’articolo 55.
5. 	Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. 	Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 
7. 	I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. 	Ai sensi dell’articolo 18 comma 12 della Legge 55/1990 e successive modifiche, è fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto (anche per quelli non assimilabili al subappalto e cioè quelli che ricadono al di fuori dei limiti riportati al comma 6 del presente articolo, in cui [(l’importo S del subappalto è minore del 2% dell’importo del contratto principale e S < 100'000 Euro) oppure (la percentuale di manodopera su S è minore del 50%)], il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. 	Per ogni richiesta di subappalto e per ogni comunicazione di subcontratto non assimilabili a subappalto, l’Appaltatore deve produrre:
 )	nel caso di subappalto apposita relazione indicante la dimostrazione analitica e normativa che l’importo dello stesso sia compatibile con i diversi limiti imposti dalla normativa, tenendo conto di eventuali altri subappalti concessi appartenenti alla stessa categoria;
 )	nel caso di subcontratto non assimilabile a subappalto la dimostrazione analitica e normativa che lo stesso non sia assimilabile a un subappalto;
 )	Per entrambi i casi a) e b) sopra riportati, il riepilogo di tutti i subappalti e subcontratti in corso.
In particolare, ai fini della dimostrazione dei limiti sul prezzo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, secondo quanto riportato dal comma 4 dell’articolo 4 della Legge 55/1990 e successive modifiche, e della percentuale di manodopera, l’Appaltatore dovrà presentare un’analisi compiuta della lavorazione subappaltata nel caso che la prestazione oggetto di subappalto differisca anche parzialmente da quelle risultanti dall’aggiudicazione per effetto di oneri non totalmente trasferiti al subappaltatore ma compresi nel prezzo contrattuale.
1.	Non verranno rilasciati certificati di esecuzione dei lavori subappaltati se l’Appaltatore o il subappaltatore non avrà prodotto quanto richiesto al seguente articolo 49 del presente Contratto; ciò in quanto, in tal caso, l’Amministrazione non sarebbe in grado di certificare gli importi realmente eseguiti.
Art. 48	  RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.	L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. 	Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 49	  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZATE
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 
Ai sensi dell’articolo 18 comma 3bis della Legge 55/1990 e successive modifiche, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate ed inoltre a produrre prospetto riepilogativo di tutti i pagamenti effettuati subappaltatori ed ai cottimisti con la verifica che siano rispettati i limiti degli importi dei subappalti imposti dalla normativa vigente.

CAPO X - 
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’IMPRESA
Art. 50	INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO E CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI
L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nella stessa area di cantiere interessata dai lavori del presente progetto e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e le decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori.
Per quanto riguarda le interferenze con sottoservizi esistenti (acquedotti, fognature, linee elettriche ed interrate, linee telefoniche, etc.) dovrà essere garantito il servizio durante l’esecuzione dei lavori secondo quanto riportato all’art. 52 comma 29 del presente Schema di Contratto.
Inoltre, sarà onere dell’Impresa, una volta ultimati i lavori, provvedere a sistemare in maniera definitiva i sottoservizi esistenti assicurandone il loro servizio in maniera efficace.
Per tutte le tipologie di interferenze si dovrà operare a regola d’arte in modo da assicurare il servizio a tempo indeterminato; le modalità di intervento verranno concordate di volta in volta con la Direzione Lavori.
Art. 51	DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA
L'Impresa é tenuta ad affidare la Direzione Tecnica dei lavori ad un ingegnere che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
La comunicazione del nominativo del predetto ingegnere dovrà essere inoltrata all'Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.
Il predetto ingegnere dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.
Art. 52	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE                          (ONERI DI CAPITOLATO)
Oltre agli oneri del Regolamento, a quelli del Capitolato Generale, a quelli previsti da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed agli altri specificati nel presente contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:
1.	tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione (art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto, D.P.R. n°. 145 del 19/04/2000).
2.	lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro  nonché le eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e Coordinamento e il piano operativo di sicurezza;.
3.	l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà  essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione. Si intende inclusa l’alimentazione elettrica necessaria per le prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;
4.	tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori, per il collaudo delle condotte e per ogni altra necessità  dell'Impresa, nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista degli stacci e vagli per granulometria degli inerti;
5.	la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, e la guardiania dei locali, di attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà  di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
6.	l’impianto in località da stabilire dalla D.L. di locale di almeno 50 m2, ad uso ufficio ed alloggio del personale di direzione e assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminato, dotato di telefono fisso e climatizzato con pompe di calore di adeguata potenza; nonché una persona fissa, di gradimento della D.L., addetta alla gestione dei locali di cui sopra;
7.	lo svolgimento, incluse le spese e gli oneri, nessuno escluso, di tutte le pratiche e le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ENPI, ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da realizzare.	
Allo scopo l’Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazio-ne  fornirà all’Impresa aggiudicataria copia di tutte le autorizzazioni ottenute. Sarà cura dell’Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto della Stazione appaltante.
1.	le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 193 del regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554 e dell’articolo 37 del Capitolato Generale D’Appalto nonché per i collaudi funzionali delle forniture, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, relative al personale della Direzione Lavori e della Stazione appaltante inviato per il collaudo in fabbrica dei materiali e delle apparecchiature;
9.	la verifica dei calcoli statici ed elettrici;
10.	assumere tutti gli oneri e le spese connesse alle prove di carico delle strutture in c.a., acciaio e legno e all’espletamento del collaudo statico di tutte le strutture, per le quali tali procedure sono prescritte dalle leggi vigenti;
11.	la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, etc., che al riguardo fossero prescritti.
12.	l’esecuzione di ulteriori indagini geognostiche per la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno e l’esecuzione di prove in sito e/o laboratorio per la valutazione della idoneità delle eventuali strutture esistenti oggetto dell’intervento.
13.	l’esecuzione di tutti i tracciamenti delle opere, degli assi delle opere e di tutti e rilievi di dettaglio riferiti alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, etc.	
La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna.	
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore, dopo la consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere (comprese le eventuali strade di servizio ):
 .	tracciamento planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell'Appaltatore, che saranno man mano consegnate integre alla Direzione Lavori. L'Appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;
 .	livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla D.L. appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di tracciamento che verranno indicati dall'Amministrazione ed ai quali farà riferimento; a prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della Direzione dei Lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna;
 .	picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la Direzione Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;
 .	canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se ammesso dalla Direzione Lavori) tra picchetto e picchetto;
 .	livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;
	L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.
	L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente l’andamento delle opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'Appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.
	Resta anche stabilito che l'Appaltatore, ove siano successivamente intervenute variazioni rispetto ai tracciati individuati così come detto in precedenza, dovrà poi sollecitamente far luogo, a sua cura e spese, e limitatamente alle opere interessate da dette varianti, agli adempimenti di cui ai precedenti comma b), c), d), e).	
Nei casi ove le opere appaltate prevedano anche la esecuzione di uno o più tronchi di strade di servizio, l'Appaltatore, sulla base dei tracciati previsti in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, è tenuto parimenti a far luogo, a sua cura e spese, a tutti i necessari adempimenti, analogamente a quanto già specificato in precedenza onde si possa far luogo, tempestivamente, agli adempimenti previsti per fornire con la massima sollecitudine, gli elaborati esecutivi tra i quali, in particolare:
-	planimetria, scala variabile 1:100 - 1:500 secondo le richieste della Direzione Lavori, a curve di livello;
-	profilo longitudinale, scala 1:100/1000, in asse;
-	sezioni trasversali, scala 1:100;
-	piante e sezioni delle opere d'arte, in scala variabile 1:100 1:10, secondo le richieste della D.L.
	Si precisa che, sotto il profilo catastale, le accennate operazioni di rilievi in campagna e di lavoro a tavolo potranno essere eseguite, a giudizio insindacabile della D.L., con la collaborazione dei tecnici del competente Ufficio Tecnico Erariale.
	Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi della esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.
	L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo. 
	Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, per le canalizzazioni come per qualsiasi altra opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere.
14.	la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, dei lucidi e di due copie delle opere eseguite in scala di dettaglio, sia a livello planimetrico che altimetrico, con l’ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovrà essere consegnata una copia su lucido, una copia su supporto magnetico in formato DWG, più tre copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate;
15.	l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 46/90 e dal DPR 547 e successive modificazioni ed integrazioni;
16.	le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l’invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo.	
Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti;
17.	la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in particolare dell'apparecchiatura per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;
18.	è fatto obbligo all'Impresa di far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo raccomandata AR, all'Amministrazione appaltante i dati relativi: alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche; ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio; ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando all’Appaltatore le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo.
19.	l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità Militari, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorità Militari, dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa affidati (sia entro i terreni messi a disposizione dell'Amministrazione per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisionali a suo diretto carico), per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione; attenersi inoltre scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;
20.	tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva (oltre le aree da asservire, espropriare e in occupazione temporanea previste nel progetto esecutivo dell’Amministrazione) dei terreni occorrenti per l'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari; tutti gli indennizzi ai proprietari delle discariche, della cava e dei terreni dai quali saranno estratti tutti i materiali da costruzione, tutti gli oneri per l'esercizio delle cave, per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali;
21.	provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali atte e garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.). Inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà provvedere all'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
22.	i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
23.	le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime;
24.	provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine oltre la larghezza indicata nel progetto esecutivo, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;
25.	provvedere alla rimozione di pali e recinzioni esistenti, di qualunque tipo, compresa la demolizione di relativi cordoli di fondazione, insistenti sulle aree oggetto di intervento;
26.	consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture delle tubazioni, delle apparecchiature idrauliche, dell’impianto di produzione dei calcestruzzi e dei prefabbricati e l'esecuzione delle altre opere;
27.	l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà  eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta;
28.	provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà della Stazione appaltante in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto dell'Amministrazione Appaltante.
I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
29.	tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di impianti, condotte, canali etc. che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà  pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
30.	la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Contratto e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art.20 del Capitolato Generale;
31.	l'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;
32.	é riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che dovranno rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali prestazioni di tali impianti e mezzi d'opera saranno pagate all'Impresa secondo quanto stabilito all'art. 43 “Lavori in economia” del presente Contratto. Nessun compenso sarà  riconosciuto all'Impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati.
33.	le spese per l'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie per proteggere dall’acqua gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne. L'Appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette opere provvisionali che per la deviazione dei corsi d’acqua;
34.	le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
35.	la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
36.	il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
37.	l'Appaltatore é responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;
38.	l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. L'ottenimento, a richiesta dell'Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Amministrazione Appaltante;
39.	la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e precisamente nelle località  che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, di 2 cartelli di cantiere così come stabilito nel successivo articolo 61 del presente Contratto.
2.	la sistemazione di tutte le aree circostanti le opere eseguite e modificate dalle attività di cantiere, mediante il ripristino dello status quo al fine di ricostituire la continuità con il paesaggio circostante;
41.	l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località  in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località  e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore é obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse.
42.	l'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare , ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà  effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita;
43.	provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori. L'Appaltatore é inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e a dotare gli stessi di mezzi strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità  in caso di infortuni;
44.	le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità  degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione Appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
45.	tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa;
46.	gli oneri per tutti i controlli distruttivi e non sulle strutture principali, sulle tubazioni, sui pezzi speciali che saranno ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori;
47.	tutti gli oneri relativi ai controlli del tipo ad ultrasuoni, alle relative registrazioni e ai controlli di tipo radiografico che andranno effettuati sulle sole saldature indicate insindacabilmente dalla Direzione Lavori;
48.	gli oneri derivanti dall’eventuale rallentamento dell’esecuzione dei lavori nelle zone in cui è prescritta la presenza dei funzionari della Soprintendenza Archeologica in fase di esecuzione degli scavi. Il rimborso delle spese sostenute dalla stessa Soprintendenza è posto a carico dell’Ente;
49.	tutti gli oneri, nessuno escluso, inseriti nel presente Contratto, nel Capitolato e nei vari disciplinari tecnici;
50.	tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (ex D.Lvo. n° 626/94 e succ. mod.), all’integrazione del Piano di sicurezza alle effettive modalità esecutive e al Piano operativo di sicurezza nonché l’effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.Lvo. n° 626/94 e la convenzione del medico competente per l’intera durata dei lavori;
51.	messa a disposizione per l’intera durata del cantiere di una autovettura climatizzata nuova di cilindrata non inferiore a 1200 cc., compresa la fornitura del carburante e del lubrificante necessario, la manutenzione, fino al collaudo definitivo delle opere nonché il provvedere alla stipula di contratto assicurativo R.C.A., compresi gli infortuni del conducente e dei trasportati, e la garanzia Kasko. Tale fornitura dovrà essere concordata con la D.L. alla consegna dei lavori ed eseguita prima dell’inizio effettivo dei lavori stessi;
3.	fornitura definitiva di n° 2 macchine fotografiche digitali per l’Ente Appaltante con le seguenti caratteristiche minime: sensore: n° pixel 8'000'000, risoluzione 3.264x2448; obiettivo: focale 6.1-21.6 mm f/2.6, equiv. 35 mm: 24-85, zoom digitale 4x, Fuoco AF, distanza minima fuoco 3 cm.; esposizione: priorità, velocità otturatore M – 1/8000; mirino ottico, dimensioni monitor 1.8’’; funzioni: fuoco manuale, flash incorporato: auto, red eye on, off, flash esterno, bilanciamento del bianco: auto, ripresa video + audio; memoria: supporto compact flash, capacità 1 Gb; connessioni: uscita video USB; software in dotazione piattaforma Win; accessori: cavo video, cavo USB, custodia, cinghia, software, carica batterie; generali: alimentazione ricaricabile, Li-ion con autonomia di scatto di almeno 260 immagini, dimensioni 113x82x75 mm. L’onere della documentazione fotografica dei lavori rimarrà a carico dell’Amministrazione. Tale fornitura dovrà essere concordata con la D.L. alla consegna dei lavori ed eseguita prima dell’inizio effettivo dei lavori stessi;
4.	fornitura definitiva di n° 2 notebook per l’Ente Appaltante, aventi le seguenti caratteristiche minime: processore Pentium M 2.26 GHz o superiore; memoria RAM 1024 MB (1x1024 MB) tipo DDR 533 MHz, memoria scheda video 256 Mb, dedicata, hard disk ATA133 da 100 Gb 7200 rpm, scheda di rete, scheda audio, masterizzatore DVD +/- RW Dual Layer, floppy drive esterno, schermo LCD, dimensioni schermo 17’’ WUXGA (risoluzione 1920 x 1280 pixel); garanzia 3 anni “on-site”; completo di Sistema Operativo Windows XP Pro SP2, di software Office XP Professional 2003, Primus 3000 R2c (o successivo) con modulo analisi, tutti completi di licenza d’uso, borsa per il trasporto dedicata, mouse ottico con presa USB. Tale fornitura dovrà essere concordata con la D.L. alla consegna dei lavori ed eseguita prima dell’inizio effettivo dei lavori stessi;
5.	fornitura definitiva di n° 2 stampanti tecnologia LASER formato A4 a colori per l’Ente Appaltante; caratteristiche minime delle stampanti: 14 ppm, qualità di stampa 1200x1200 dpi effettivi, 32 MB di Ram, fusore ad attivazione istantanea; vassoio di alimentazione della carta da 150 fogli; 
6.	fornitura definitiva di n° 2 SOFTWARE MANTUS P della ACCA software per l’elaborazione dei piani di manutenzione per l’Ente Appaltante secondo le prescrizioni dell’art. 40 del D.P.R. 554/99;
7.	fornitura definitiva di n° 2 memorie di massa rimovibili USB 2.0, 1024 Mb per l’Ente Appaltante.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del seguente appalto.
L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si é tenuto conto nello stabilire la propria offerta, ivi incluso il compenso a corpo per oneri della sicurezza. Non spetteranno quindi altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualità che l'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.
Art. 53	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.
L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l'uso degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.
L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti e tutelatrici delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

CAPO XI - 
MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 54	  CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. 	L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) 	nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) 	i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) 	è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L’Appaltatore e i subappaltatori per suo tramite devono altresì trasmettere, a scadenza quadrime-strale e in ogni caso prima dell’emissione di ogni stato di avanzamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa; in caso contrario l’Amministrazione provvederà alla detrazione di cui al comma 3 del presente articolo.

3. 	In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

4. 	Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 55	   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1.	La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a)	frode nell'esecuzione dei lavori;
b)	inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c)	manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d)	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e)	sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f)	rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g)	subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h)	non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)	nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente Contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2.	Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3.	Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4.	In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5.	Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a)	ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b)	ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1)	l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2)	l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3)	l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6.	Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

CAPO XII - 
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56	COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO
Durante l’esecuzione delle opere appaltate l'Amministrazione potrà disporre un collaudo tecnico provvisorio delle stesse allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio.
Si procederà ad un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa con le modalità prescritte dal regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554. Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo. Tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio sono a carico dell'Impresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di collaudo.
Le spese per le verifiche di funzionamento saranno sostenute dalla Impresa.
Art. 57	   ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE
1. 	Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. 	In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. 	L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. 	Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Contratto.
Art. 58	CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO - GARANZIA DELLE OPERE
Come già indicato all’articolo 24 del presente Contratto, il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dall’ultima delle seguenti date:
•	data di ultimazione lavori, accertata con apposito verbale;
•	termine perentorio, di cui al comma 2 dell’art. 172 del Regolamento n° 554/1999, eventualmente assegnato nel certificato di ultimazione per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
•	data di consegna della documentazione di cui all’art. 23 comma 5 del presente Contratto.

Salva la facoltà dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso, ai sensi dell'art. 192 del regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, entro SEI MESI dalla data di redazione del conto finale, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 208 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di redazione del conto finale.
Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini precedenti, l'Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.
Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera e finale sono a totale carico dell’Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.
L'impresa dovrà inoltre assumere garanzia di ventiquattro mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva delle opere all’Amministrazione, relativamente alle forniture. Qualora per il detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o malfunzionamenti alle apparecchiature, l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e/o sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'Amministrazione appaltante o da chi per essa.
A sostegno della garanzia di cui sopra, prima dello svincolo delle cauzioni già prestate, l'Impresa dovrà costituire altra cauzione di importo pari ad 1/3 della cauzione definitiva prestata, che sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia. 
Per tale cauzione, l’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 59	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. 	La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. 	Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. 	Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. 	La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. 	Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Contratto.
6.  Su indicazione della stazione appaltante, l’appaltatore dovrà consegnare le opere all’entità terza individuata.
Art. 60	CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 61	CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
L'Impresa esecutrice commissionerà i predetti cartelli entro cinque giorni dalla data della consegna dei lavori, scegliendo la Ditta fornitrice ed accordandosi con la stessa per il prezzo e l'installazione mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 idoneamente fondati ed ancorati nel terreno, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.
Alla Stazione Appaltante competerà, invece, la scelta della loro ubicazione nel cantiere nella località che indicherà il Direttore dei Lavori,
Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore.
L'Impresa, nel caso che i cartelli giunti a destinazione dovessero risultare in non perfette condizioni, è tenuta a dare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.
L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato i cartelli installati ed all'occorrenza ad eseguire i ritocchi che si dovessero rendere necessari.
Art. 62	  SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (stipula dell’atto, imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

-----====ooo(O)ooo====-----